개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

섬진강변 전선지중화사업(침곡~송정)

담당자

안전건설과 장철수(☎360-8621)

□ 사업목적 및 필요성

○ 경관이 수려한 국도 17호선(침곡~송정) 구간의 전신주가 미관 저해

○ 전선 지중화로 증기기관차, 레일바이크 등과 연계한 관광상품 개발

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 2. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 오곡면 침곡역 앞 ~ 송정구간

○ 규 모 : 전선지중화 0.85km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  4,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,600	500	3,500	600	0
국 비	0
시 도 비	500		500
시군구비	2,300	500	1,200	600
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	1,800		1,800

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  40%)

○ 침곡~송정구간 굴착심의 및 도로점용 협의, 설계완료 : 22. 4.

○ 사업발주                                          : 22. 5.

○ 공사 일시정지(한전 자재수급 지연 및 파업)         : 22. 6.

□ 향후계획

○ 한국전력공사 일정 조율 후 사업시행 : 22. 9. ~ 12.

사업명

곡성 보성강변 선형관광 거점화사업

담당자

관광과 정진곤(☎360-8432)

□ 사업목적 및 필요성

○ 보성강변의 수려한 자연환경과 체험형 관광콘텐츠 연계를 통한 시너지

효과 창출 및 체류형 관광 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022~2024(3년)

○ 위 치 : 곡성군 죽곡면 태평리(강빛마을 옆 군유지)

○ 규 모 : 체험형 힐링공간 조성 A=15,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,800백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,800	-	-	300	5,500
국 비
시 도 비	2,900	-	-	150	2,750
시군구비	2,900	-	-	150	2,750
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 실시설계용역 추진(이색 놀이공간 등) : 2022. 9. ~ 2023. 3.

□ 향후계획

○ 사업발주 및 공사 시행 : 2023. 4. ~

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

옛 장터 주민참여 문화공간 조성사업

담당자

관광과 김현식(☎360-8431)

관광과 정진곤(☎360-8432)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현재 유휴공간인 옛 장터를 주민들과 관광객이 함께 참여하는 문화공간

으로 재탄생

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022~2024(3년)

○ 위 치 : 곡성군 입면 입석리/죽곡면 태평리

○ 규 모 : 문화공간 조성 A=5,094㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,800백만 원

(단위 : 백만 원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,800	-	-	1,000	4,800
국 비
시 도 비	2,900	-	-	500	2,400
시군구비	2,900	-	-	500	2,400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 옛 입면장터 문화재생 기본구상 컨설팅 연구용역 : 2021. 12.

○ 옛 장터 문화공간 조성사업 디자인 설계용역 추진 : 2022. 4. ~ 12.

□ 향후계획

○ 옛 입면 장터 사유지(가옥) 등 매입 추진 : 2022. 12. ~

- 행정절차 이행(공유재산 심의회, 공유재산 관리계획 등), 토지매입 협의 등

○ 옛 장터 문화공간 조성사업 실시설계용역 추진 : 2022. 9. ~ 2023. 3.

- 옛 입면장터(장옥) 재생, 옛 죽곡장터 친수공원 조성 등

○ 사업발주 및 공사 시행 : 2023. 3. ~

- 옛 입면장터 장옥 재생 등

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

곡성 섬진강 기차마을 다목적광장 조성사업

담당자

관광과 박창준(☎360-8423)

□ 사업목적 및 필요성

○ 섬진강기차마을 첫 관문에 대한 정비를 통해 기차마을을 찾는 관광객들에게 쾌적하고 편안한 관광 이미지 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022~2024(3년)

○ 위 치 : 곡성군 오곡면 오지리 721-1번지 일원

○ 규 모 : 장미정원확장 A=35,500㎡, 장미주제관 조성 A=900㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,800	-	-	800	5,000
국 비
시 도 비	2,900	-	-	400	2,500
시군구비	2,900	-	-	400	2,500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 장미정원확장 실시설계용역 완료 : 2021. 2. ~ 12.

○ 장미정원 확장사업 1차분 준공 : 2022. 1. ~ 6.

□ 향후계획

○ 장미정원 확장사업 잔여분 추진 : 2023. 1. ~ 12.

○ 장미주제관 조성 추진 : 2023. 1. ~ 2024. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

군유림 확대사업

담당자

산림과 장광석(☎360-8770)

□ 사업목적 및 필요성

○ 각 지역에 산재한 군유림을 확대·집단화하여 효율적으로 군유림 관리

○ 섬진강, 동악산 등지의 경관 보전 및 공익적 기능 강화

□ 사업개요

○ 기 간 :  2021. ~ 2031.

○ 위 치 : 곡성군 관내 사유림

○ 규 모 : 370ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,880백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	19,880		-	30	19.850
국 비
시 도 비
시군구비	19,880	-	-	30	19,850
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 계획수립)

○ 군유림 확대필지에 대한 사전 안내문 발송

○ 관내 거주자에 대한 매도의사 문의 지속 추진

□ 향후계획

○ 매수대상 모든필지에 대한 사전안내 추진

○ 매도의사 필지에 대한 현장조사 및 감정평가 실시

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

신재생에너지보급 융복합지원사업

담당자

도시경제과 황정석(☎360-8714)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신재생 에너지 보급 확대로 군민 에너지 복지 실현 및 에너지 자립마을 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 곡성읍, 오곡면 오지리, 덕산리, 승법리 일원

○ 규 모 : 414개소(태양광 375, 태양열 38, 연료전지 1)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,483백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,483	-	2,075	1,408	-
국 비	1,825	-	1,300	525	-
도 비	157	-	116	41	-
군 비	923	-	659	264	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	578	-	-	578	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 공모사업 최종선정 : 2020. 9.

○ 협약체결 (곡성군 ↔ ㈜신호엔지니어링 외 4개사) : 2021. 1.

○ 사업 추진(414개소) : 2021. 3. ~ 2022. 11.

□ 향후계획

○ 사용 전 점검 완료 및 준공 : 2022. 12.

○ 회계 정산 : 2023. 3.

□ 사업변경 내역

구분	변경전(A)	변경후(B)	증감(B-A)	비고
개소수	415	414	▼1
총사업비(천원)	3,636,558	3,483,236	▼153,322
국비(천원)	1,901,050	1,825,040	▼76,010
지방비(천원)	1,126,796	1,079,283	▼47,513
자부담(천원)	608,712	578,913	▼29,799

사업명

미세먼지 차단숲 조성사업

담당자

산림과 이미선(☎360-8790)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농공단지와 인접해 있어 다량의 미세먼지와 작업 차량들의 분진 유입이       우려되는 곳으로 공해물질의 효과적 차단을 위한 숲 조성 필요

□ 사업개요

○ 기 간 :  2021. 1. ~ 11.

○ 위 치 : 옥과면 죽림리 626-3 일원(옥과천변 일원)

○ 규 모 :  3ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	7,000		3,000	2,000	2,000
국 비	3,500	-	1,500	1,000	1,000
시 도 비
시군구비	3,500	-	1,500	1,000	1,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2020. 8. ~ 12. : 미세먼지 차단숲 조성사업 실시설계

○ 2021. 1. ~ 6. : 미세먼지 차단숲 조성사업 수목 식재 추진

○ 2021. 6. ~ 10. : 낙찰차액 활용 보완식재, 사후관리 추진

□ 향후계획

○ 사후관리 추진 : 수시

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

선도산림경영단지 조성사업

담당자

산림과 장광석(☎360-8770)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우량대경재의 지속적 생산기반 마련을 위한 목재생산림 조성

○ 산림경영 성공모델을 개발 확산하여 사유림 경영활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 :  2021. ~ 2030.

○ 위 치 : 곡성군 죽곡면 하한리, 고치리 일원

○ 규 모 :  611ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	7,500		500	780	6,220
국 비	5,250	-	350	546	4,354
시 도 비	674	-	45	70	559
시군구비	1,576	-	105	164	1,307
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 기본계획 수립용역 : 2021. 2. ~ 8.

○ 사업계획(1년차) 검토 및 승인 : 2021. 1. ~ 2.

○ 1년차 사업 실행(설계, 감리, 직접사업) : 2021. 2. ~ 11.

- 산림경영계획(611ha), 임도(0.83km)

○ 사업비 정산 및 실적보고 : 2021. 12.

□ 향후계획

○ 연차별 산림사업 추진 : 매년

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

섬진강 근린공원

(장기미집행/동화정원)조성사업

담당자

관광과 오경택(☎360-8421)

□ 사업목적 및 필요성

○ 섬진강 근린공원(동화정원)을 조성함에 있어 가족단위 방문객이 찾을수 있도록 북숲 조성을 통해 어린이 놀이 및 교육공간을 병행하여 조성함으로써 관광 경쟁력까지 제고함에 따라 역량 있는 근린공원으로 조성할 필요가 있음.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022 ~ 2025(4년)

○ 위 치 : 곡성군 오곡면 승법리 71번지 일원

○ 규 모 : 근린공원 A=113,762㎡(북숲조성, 유아숲체험원 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	12,600	3,300	600	3,000	5,700
국 비
시 도 비	6,300	1,650	300	1,500	2,850
시군구비	6,300	1,650	300	1,500	2,850
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 실시계획 수립용역 추진 : 2022. 4. ~ 2023. 10

□ 향후계획

○ 공사시행 및 사업추진 : 2023. 11

□ 사업변경 내역

○ 해당없음