[별지6] 2022년 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

곡성형 청년 유토피아 시범마을 구축

담당자

인구정책과 박옥민(☎360-2953)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존 마을 재생의 한계를 극복할 수 있는 대안으로 외부 유입 청년과 거주민이 한 곳에 어우러지는 농촌 융합 공간 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. ~ 2026.(4년)

○ 위 치 : 삼기면 괴소리 산77-1번지 일원/삼기온천(군유지 51,425㎡)

○ 규 모 : 스마트그린빌리지, 생태문화복합센터, 일자리 시설, 공동체프로그램

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	6,000	-	-	1,000	5,000
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-
지방소멸대응기금	6,000	-	-	1,000	5,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  5%)

○ 청년 유토피아 마을 구축 연구 용역: 2022. 9. ~ 2023. 4.

○ 업무추진 협약식: 2023. 3. 13.

- 지자체(7): 곡성군, 괴산군, 금산군, 남원시, 문경시, 의령군, 횡성군

- NGO(3): 농촌유토피아연구소, 농촌유토피아대학교, 벤처농업대학

- 기업(7): 세경그룹, 골드에어팜, 썬웨이, 연리지, 지엘비텍, 케이제이파트너스, 더기린

□ 향후계획

○ 공공건축 사업계획서 사전검토 및 공공건축 심의: 2024. 1. ~ 6.

○ 기본계획 및 실시설계 공모 및 설계: 2024. 6. ~ 2025. 6.

○ 건설사업관리 사업수행 능력평가: 2025. 6. ~ 9.

○ 공사 발주 및 시설 공사: 2025. 8. ~ 2026. 12.

사업명

도담도담 마을로 이어지는 곡성유학 완성

담당자

인구정책과 박옥민(☎360-2953)

□ 사업목적 및 필요성

○ 체류형 농촌유학 프로그램 참여자 및 젊은 학부형세대 유입을 통한 오산초등학교 살리기 및 지역 경제 활성화를 통한 지역소멸위기 극복

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. ~ 2023.(2년)

○ 위 치 : 오산면 단사리 433번지 일원

○ 규 모 : 모듈러주택 4동(1층 2동 / 2층 2동)·커뮤니티센터 조성 및 부대토목 공사

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,000	-	-	2,000	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-
지방소멸대응기금	2,000	-	-	2,000	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  70%)

○ 계약심사: 2023. 3. 7

○ 공용건축물 건축협의 : 2023. 5.

○ 오산권역 관외자 임시 거주시설 4동 공사 계약: 2023. 5. ~ 10.

□ 향후계획

○ 오산권역 관외자 임시 거주시설 4동 준공: 2023. 10.

○ 2024년 1학기 곡성유학 참여자 모집: 2023. 11. ~ 12.

사업명

곡성 한터 조성 “한터”를 함께 쓰다

담당자

인구정책과 조영아(☎360-2952)

□ 사업목적 및 필요성

○ 폐교 위기 학교의 존립을 위한 지역 내 공동체 활동 공간 조성 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 곡성군 삼기면 괴소리 291번지외 2필지

○ 규 모 : 공동체 공간조성 1개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,000	-	-	1,000	1,000
국 비	1,000	-	-	1,000	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,000	-	-	-	1,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 지역사회활성화기반조성사업 공모 선정 : 2022. 11.

○ 사업위치 변경 심의(행정안전부) : 2023. 3. ~ 5.

○ 공공건축 기획 용역 발주 : 2023. 6.

□ 향후계획

○ 실시설계용역 추진 : 2023. 8. ~ 2023. 12.

○ 공사추진 : 2024. 3. ~ 2024. 12.

□ 사업변경 내역

구 분	사업내역
	당초	현재
기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	2023. 1. ~ 2024. 12.
위치	오산면 단사리 433 외 2필지	삼기면 괴소리 291 외 2필지
규모	2개소(공간조성 1개소, 리모델링 1개소)	1개소(공간조성)

사업명

러스틱 타운 고도화 사업

담당자

인구정책과 조영아(☎360-2952)

□ 사업목적 및 필요성

○ 새로운 주거문화를 추구하는 도시 청년 유치를 위한 우리 군만의 창의적이고 차별화된 정책 모델 추진

○ 기존 지역민과 농촌유학 가정, 도시청년이 공존하며 독특한 지역 문화 형성 및 새로운 일자리 창출로 공유경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 곡성군 삼기면 괴소리 291번지 일원

○ 규 모 : 농촌유학 및 워케이션 청년 거주공간 19채, 공유오피스 1개소 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	6,600	-	-	100	6,500
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	600	-	-	100	500
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-
지방소멸대응기금	6,000	-	-	-	6,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 지방소멸대응기금사업 확정 : 2022. 9. 1.

○ 기존건축물 철거공사 실시설계용역 : 2023. 3. ~ 5.

○ 공공건축 기획 용역 : 2023. 3. ~ 7.

□ 향후계획

○ 건축설계 공모 : 2023. 8. ~ 10.

○ 기존건축물 철거 : 2023. 9. ~ 2024. 2.

○ 실시설계용역 : 2023. 10. ~ 2024. 3.

○ 공사추진 : 2024. 3. ~ 2024. 12.

사업명

곡성 유학마을 조성 – 너나들이 석곡

담당자

인구정책과 조영아(☎360-2952)

□ 사업목적 및 필요성

○ 학령인구 감소에 따른 농촌 초등학교 폐교 위기 및 지역활력 저조

○ 지역의 폐교를 활용하여 가족 체류형 농촌 유학 프로그램 참여자 거주시설 단지를 조성하여 안정적 지역 인구 정착 유도 및 곡성의 생활인구 확대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 곡성군 죽곡면 삼태리 444 일원 / (구)석곡초교 욕천분교

○ 규 모 : 임시거주용 모듈러주택 19채, 마을공유공간 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,700	-	-	2,700	2,000
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-
지방소멸대응기금	4,700	-	-	2,700	2,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 지방소멸대응기금사업 확정 : 2022. 9. 1.

○ 1차 공사 실시설계용역 : 2023. 2. ~ 7.

○ 기존건축물 석면 해체 완료 : 2023. 4.

○ 1차 공사 계약심사 : 2023. 8.

□ 향후계획

○ 1차 공사추진 : 2023. 9. ~ 2024. 8.

○ 2차 공사 실시설계용역 및 공사추진 : 2023. 11. ~ 2024. 12.

사업명

곡성, 돌아오지촌 조성사업

담당자

인구정책과 심효경(☎360-2951)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역의 꿈과 희망인 가족과 청년이 곡성으로 돌아올 수 있도록 교육, 체험,       거주가 결합 된 체류형 마을 조성

○ 지속적인 관계 인구 유입을 위하여 건축학교 등 장기 체류형 콘텐츠 프로그램       운영으로 지속 가능한 곡성 만들기 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023

○ 위 치 : 전남 곡성군 오곡면 오지리 948-1번지 일원

○ 규 모 : 건축 연면적 1,337㎡

- 1단계 : 숙박동 11동/ 737㎡

- 2단계 : 숙박동 10동, 관리동 1동/ 600㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	7,300		600	2,800	3,900
기 금	7,000		300	2,800	3,900
군 비	300		300

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 지방소멸대응기금 사업 확정: 2022. 9. 1.

○ 지방재정 투자심사: 2022. 11. 16.

○ 실시설계 완료: 2023. 8.

□ 향후계획

○ 공사 계약 및 발주: 2023. 9.

○ 공사 추진(1단계): 2023. 9. ~ 2024. 4.

○ 공사 추진(2단계): 2024. 4. ~ 2025. 2.

사업명

곡성 보성강변 선형관광 거점화사업

담당자

관광과 정진곤(☎360-8432)

□ 사업목적 및 필요성

○ 보성강변의 수려한 자연환경과 체험형 관광콘텐츠 연계를 통한 시너지

효과 창출 및 체류형 관광 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022 ~ 2025(4년)

○ 위 치 : 곡성군 죽곡면 태평리(강빛마을 옆 군유지)

○ 규 모 : 이색 체험 공간 조성 A=15,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,800백만 원                                  (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,800	-	300	-	5,500
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,900	-	150	-	2,750
시군구비	2,900	-	150	-	2,750
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 관광휴양형 지구단위계획 수립 용역 추진 : 2022. 10. ~ 2023. 10.

□ 향후계획

○ 이색 체험공간 조성 및 전시물 설치 실시설계(협상) : 2024. 1.

□ 사업변경 내역

○ 당초                                                   (단위 : 억원)

사업명	사업개요	재원	연도별투자계획
			소계	기투자	2022	2023	2024	2025이후
곡성 보성강변 선형관광거점화사업	․선형관광 거점화 - 놀이시설 - 힐링공간 - 편의시설	계	58	-	4	30	24	-
		도비	29	-	2	15	12	-
		시군구비	29	-	2	15	12	-

○ 변경                                                   (단위 : 억원)

사업명	사업개요	재원	연도별투자계획
			소계	기투자	2022	2023	2024	2025이후
곡성 보성강변 선형관광거점화사업	․선형관광 거점화 - 놀이시설 - 힐링공간 - 편의시설	계	58	-	3	-	10	45
		도비	29	-	1.5	-	5	22.5
		시군구비	29	-	1.5	-	5	22.5

사업명

옛 장터 주민참여 문화공간 조성사업

담당자

관광과 노충원(☎360-8431)

관광과 김현국(☎360-8433)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현재 유휴공간인 옛 장터를 주민들과 관광객이 함께 참여하는 문화공간

으로 재탄생

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022~2024(3년)

○ 위 치 : 곡성군 입면 입석리 369-2 일원

○ 규 모 : 문화공간 조성 A=3,700㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,800백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,800	-	85	2,915	2,800
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,900	-	85	1,415	1,400
시군구비	2,900	-	-	1,500	1,400
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 옛 입면장터 문화재생 기본구상 컨설팅 연구용역 : 2021. 12.

○ 옛 장터 문화공간 조성사업 디자인 설계용역 추진 : 2022. 4. ~ 12.

○ 기본 및 실시설계(건축, 토목) / 행정절차 이행 : 2022. 8. ~

○ 건축아카이브 구축, 운영콘텐츠 발굴 용역 : 2023. 2. ~

○ 옛 입면장터 장옥 주변 폐기물처리 및 정비 : 2023. 5.

□ 향후계획

○ 옛 입면장터 장옥 재생사업 발주 : 2024. 1. ~

○ 편의공간 조성을 위한 폐가옥 매입 및 임차 협의 : 2024. 1. ~ 6.

○ 운영콘텐츠 프로그램 발굴 : 2024. 1. ~ 12.

- 문화7일장(청년문화 場돌뱅이 프로그램 등), 문화․예술 체험프로그램 등

○ 주민참여 문화공간 운영체 구성 협의 : 2024. 7. ~

- 주민참여 프로그램 발굴 및 논의, 프로그램 운영 협의 등

□ 사업변경 내역

○ 당초 : 곡성군 입면 입석리/죽곡면 태평리, 문화공간 조성 A=5,094㎡

○ 변경 : 곡성군 입면 입석리, 문화공간 조성 A=3,700㎡

(죽곡 장터 사업 대상지가 타 사업에 포함되어 해당사업 선행 후 사업 검토)

사업명

곡성 섬진강 기차마을 다목적광장 조성사업

담당자

관광과 박창준(☎360-8422)

□ 사업목적 및 필요성

○ 섬진강기차마을 첫 관문에 대한 정비를 통해 기차마을을 찾는 관광객들에게 쾌적하고 편안한 관광 이미지 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022~2025(4년)

○ 위 치 : 곡성군 오곡면 오지리 721-1번지 일원

○ 규 모 : 장미정원확장 A=35,500㎡, 장미주제관 조성 A=900㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,800	-	800	1,600	3,400
국 비
시 도 비	2,900	-	400	800	1,700
시군구비	2,900	-	400	800	1,700
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 장미정원확장 실시설계용역 완료 : 2021. 2. ~ 12.

○ 장미정원 확장사업 준공 : 2022. 1. ~ 2023. 7.

○ 장미주제관 기본계획용역 추진 : 2023. 4. ~ 2023. 12.

□ 향후계획

○ 다목적광장 조형물 설치 : 2024. 1. ~ 6.

○ 장미주제관 조성 추진 : 2025. 1. ~ 2025. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

섬진강 근린공원(장기미집행/동화정원)조성사업

담당자

관광과 윤지량(☎360-8421)

□ 사업목적 및 필요성

○ 섬진강 근린공원(동화정원)을 조성함에 있어 가족단위 방문객이 찾을 수 있도록 북숲 조성을 통해 어린이 놀이 및 교육공간을 병행하여 조성함으로써 관광 경쟁력까지 제고함에 따라 역량 있는 근린공원으로 조성할 필요가 있음.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022 ~ 2025(4년)

○ 위 치 : 곡성군 곡성읍 묘천리∼오곡면 승법리 일원

○ 규 모 : 근린공원 A=113,762㎡(북숲조성, 유아숲체험원 등), 인도교 L=195m 설치

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	12,600	3,300	600	2,610	6,090
국 비	6,300	1,650	300	1,305	3,045
시 도 비
시군구비	6,300	1,650	300	1,305	3,045
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 실시계획 수립용역 추진 : 2022. 4. ~ 2023. 10

○ 공원조성계획 변경 추진 : 2023. 6. ~ 2023. 10

□ 향후계획

○ 공사시행 및 사업추진 : 2024. 2.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

섬진강 기차마을 철도공원 조성사업

담당자

관광과 박창준(☎360-8422)

□ 사업목적 및 필요성

○ 섬진강기차마을 내 근대문화 유산인 구 곡성역과 유휴객차를 활용한 전시체험공간 조성 등으로 지역사회와 소통·공유·협업할 수 있는 복합문화공간 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023 ~ 2027(5년)

○ 위 치 : 곡성군 오곡면 오지리 770-5번지 일원

○ 규 모 : 증기기관차 선로 연장 및 복원화 사업 L=550m, 미니기차교량 L=111m 등

구)곡성역사 및 객차(25량 정비), 증기기관차, 역대기차 보전 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	11,800	-	-	400	11,400
국 비
시 도 비	5,900	-	-	200	5,700
시군구비	5,900	-	-	200	5,700
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 기본계획 수립 완료 : 2022. 6. 20.

○ 철도공원 조성사업(1단계) 실시설계용역 추진 : 2023. 3. ~ 12.

○ 철도공원 조성사업(2단계) 건축기획용역 추진 : 2023. 7. ~ 11.

□ 향후계획

○ 전라남도 투자심사 및 계약심사 요청 : 2023. 12.

○ 공사발주 및 사업추진 : 2024. 1. ~ 2027. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

청년농부 인큐베이팅 허브센터 조성

담당자

농정과 김원진(☎360-8342)

□ 사업목적 및 필요성

○ 스마트농업으로 청년농부가 소득을 창출하고 자립할 수 있는 인큐베이팅 시스템을 마련하여 청년인구 유입·정착 유도

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. ~ 2026.

○ 위 치 : 옥과면 일원

○ 규 모 : 13,526㎡/ 스마트팜 단지 형성(교육 및 실증형 수직농장 조성)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,900백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	6,900	-	-	2,100	4,800
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
지방소멸대응	6,900	-	-	2,100	4,800

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 「곡성군 스마트 농업 육성 및 지원 조례」 제정 : ‘23. 2.

○ 청년농부 인큐베이팅 허브센터 구축 추진계획 수립 : ’23. 5.

○ 공공건축 사업계획 사전검토 및 기획 용역 : ‘23. 8.

□ 향후계획

○ 청년농부 인큐베이팅 허브센터 조성 기본 및 실시설계 용역 추진 : ’24. 1.

○ 청년농부 인큐베이팅 허브센터 공사 착공 : ‘24. 10.

사업명

신재생에너지보급 융복합지원사업

담당자

도시경제과 이동석(☎360-8711)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신재생에너지 보급으로 에너지 자립률 제고 및 연료비 절감으로 주민행복 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 1. ~ 2023. 6.

○ 위 치 : 곡성군 옥과면, 오산면, 겸면, 입면, 삼기면

○ 규 모 : 태양광 292개소 1,079kW, 태양열 81개소 826.2㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,915백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,915		2,915
국 비	1,602		1,602
시 도 비	132		132
시군구비	749		749
지 방 채
민간자본	432		432
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 대상사업 공정률 100% 완료

□ 향후계획

○ 한국에너지공단 설치확인서 발급 후 사업정산절차 수행

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 당초 사업비 2,995백만원에서 2,915백만원으로 조정

○ 사업대상 태양광 296개소 1,125㎾ → 292개소 1,079㎾로 조정

사업명

2022년도 중․소도시 스마트시티 조성사업

담당자

도시경제과 김형규(☎360-8741)

□ 사업목적 및 필요성

○ 교통, 환경, 안전, 생활 등 지역 도시문제 해결을 위한 스마트 솔루션

○ 기 구축·구축 예정인 스마트 서비스와 연계하여 문제 해결 내실화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 04. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 곡성군 옥과면 소재지 일원

○ 규 모 : 환경․안전분야(7개 분야) 스마트 솔루션 설치, 중소도시 허브플랫폼 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	68	-	68	-	-
국 비	68	-	68	-	-
시군구비	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   %)

○ 중소도시 스마트시티 리빙랩 용역 추진 : 2022. 11. ~ 2023. 08.

○ 중소도시 스마트시티 조성사업 사업계획 검토 : 2023. 03. ~ 2023. 04.

○ 중소도시 스마트시티 조성사업 폐지 요청(국토교통부) : 2023. 05.

□ 향후계획

○ 중소도시 스마트시티 조성사업 자체비 추진 : 2023. 05. ~ 12.

- 재활용 PET 시스템 10개소, 버스쉘터․쉼터 3개소

□ 사업변경 내역(해당시)

구 분	당초	변경
사업규모	별첨 참조	별첨 참조
총사업비	40억 원	10.5억 원
사업기간	2022. 04. ~ 2023. 04.	2022. 04. ~ 2023. 12.

※ 중소도시 허브 플랫폼은 기 구축된 통합플랫폼 활용이 가능하고, 일부 사업이 타부서 사업과 중복되거나 현장여건에 부합하지 않음에 따라 사업계획 검토 및 관계부처 협의(사업폐지 요청)

사업명

2022 곡성아이스크림페스티벌

담당자

문화체육과 정지영

(☎360-8471)

□ 사업목적 및 필요성

○ 하계 관광 비수기 타개를 위해 여름 축제를 개최하여 관광객 유입

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 7. 15. ~ 7. 17.

○ 위 치 : 곡성레저문화센터

○ 규 모 : 15,000명 방문

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :    200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	400		200	200
국 비
시 도 비
시군구비	400		200	200
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2022년 7월 최초 개최

○ 15,000명 방문 / 무료 입장

□ 향후계획

○ 2024년 이후 섬진강기차마을 내 물놀이시설 운영 시 연계 행사 추진

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

곡성군 볼링장 건립

담당자

문화체육과 오순임(☎360-8493)

□ 사업목적 및 필요성

○ 직장운동경기부 및 관내 초중고대학의 체계적인 볼링선수 육성과 볼링        특화지역으로 발전시켜 각정 대회 유치로 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. ~ 2024

○ 위 치 : 옥과면 리문리 412-4외 2필지

○ 규 모 : 실내볼링장 1동(12레인)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,550백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,550	-	77	2,772	2,701
국 비	1,050	-	23	827	200
시 도 비		-	-
시군구비	4,500	-	54	1,945	2,501
지 방 채		-	-
민간자본		-	-
기 타		-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 부지매입 완료

○ 투자심사 완료, 실시설계 중

□ 향후계획

○ 레인 구매 및 각종 행정절차 완료

○ 공사 착공 및 준공

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

곡성세계장미축제

담당자

문화체육과 정지영

(☎360-8471)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고유 생태 자원(장미)를 관광상품화하여 지역 관광 산업 및 지역 경제

활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 5. 21. ~ 6. 6.

○ 위 치 : 곡성 섬진강기차마을

○ 규 모 : 281,545명 방문

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 820백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,460	-	820	820	820
국 비		-
시 도 비	60	-	20	20	20
시군구비	2,400	-	800	800	800
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 매년 5월 중순  6월 초 장미 개화 시기에 행사 개최

○ 281,545명 방문 / 입장료 수익 1,217백만원

□ 향후계획

○ 2024년 5월 중 장미축제 개최(장소 동일)

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

섬진강변 전선 지중화사업

담당자

안전건설과 장철수(☎360-8621)

□ 사업목적 및 필요성

○ 경관이 수려한 국도 17호선(침곡~송정) 구간의 전신주가 미관 저해

○ 전선 지중화로 증기기관차, 레일바이크 등과 연계한 관광상품 개발

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 2. ~ 2023. 10.

○ 위 치 : 오곡면 침곡역 ~ 송정구간

○ 규 모 : 전선 지중화 0.85km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,600	4,000	600	0	0
국 비	0
시 도 비	500	500
시군구비	2,300	1,700	600
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	1,800	1,800

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 침곡~송정구간 굴착심의 및 도로점용 협의, 설계완료 : 22. 4.

○ 사업발주 및 추진                                  : 22. 5. ~ 23. 10.

□ 향후계획

○ 상수도 관로공사 완료 후 표층 포장 및 준공         : 23. 10.

사업명

군유림 확대사업

담당자

산림과 이성계(☎360-8761)

□ 사업목적 및 필요성

○ 섬진강·보성강 주변 난개발에 따른 자연경관 훼손을 방지하고
다양한 기능으로 활용하기 위한 생태자원의 확보 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022 ~ 2031년

○ 위 치 : 곡성군 관내 사유림

○ 규 모 : 370ha(75필지)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,880백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	19,880	-	30	2,000	17,850
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	19,880	-	30	2,000	17,850

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 군유림 확대 필지에 대한 사전 안내문 발송 완료

□ 향후계획

○ 매수대상 필지에 대한 사전안내 지속적 추진

○ 매도의사 필지에 대한 현장조사 및 감정평가 실시 후 매수 추진

□ 문제점 및 대책

○ 매도의사가 확인되는 필지가 없음

⇒ 2023년 상반기까지 매도의사필지가 없을 경우 매수방법 및
대상필지 재정비하여 추진

사업명

미세먼지차단숲 조성사업

담당자

산림과 김종철(☎360-8790)

□ 사업목적 및 필요성

○ 철도나 도로에서 발생하는 미세먼지의 유입이 우려되는 곳으로
대기오염 및 공해물질의 효과적 차단을 위한 숲 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 1. ~ 7.

○ 위 치 : 오곡면 오지리 803-3(증기기관차 운행구간)

○ 규 모 : 2ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,000	-	2,000	-	-
국 비	1,000	-	1,000	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,000	-	1,000	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 실시설계 및 군 자체 투자심사 완료 : 2022. 1. ~ 3.

○ 미세먼지차단숲 조성 완료 : 2022. 3. ~ 6.

□ 향후계획

○ 사업대상지 사후관리(풀베기, 병해충방제, 덩굴제거 등)

사업명

선도산림경영단지 조성사업

담당자

산림과 박만동(☎360-8770)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우량목재의 지속적 생산기반 마련을 위한 목재생산림 조성

○ 산림경영 성공 모델을 개발 확산하여 사유림 경영활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021 ~ 2030년

○ 위 치 : 곡성군 죽곡면 하한리, 고치리 일원

○ 규 모 : 611ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	7,500	490	770	800	5,440
국 비	5,250	343	539	560	3,808
시 도 비	675	44	69	72	490
시군구비	1,575	103	162	168	1,142

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 기본계획 및 연차별 세부계획 수립 완료

○ 편백림 조성 6.7ha, 풀베기 6.7ha, 임도신설 2.32km 완료

□ 향후계획

○ 2023년(3년차) 사업계획 승인 : 2023. 1.

○ 선도산림경영단지 사업 추진 : 2023. ~ 2030.