죽정제 재해위험저수지 정비사업

	【 사업개요('17.01.～’19.12) 】
• 위 치 : 곡성군 목사동면 죽정리 343번지 일원 • 사 업 량 : 그라우팅 94공, 여방수로 정비 27.2㎡, 배수로 정비 1식 • 사 업 비 : 900백만원(국비 450, 군비 450)

□ 필 요 성

○ 정밀안전진단 결과 ”D”등급 판정을 받은 저수지로 제체 누수, 여방수로 단면 노후로 하류 마을과 농경지의 피해가 우려되는 지역임

○ 재해위험저수지 정비사업을 통하여 주민들의 인명과 재산피해를 사전에 예방에 기여

□ 사업계획

○ 실시설계용역                             : 2016. 11. ~ 01.

○ 공사착공(총괄 및 1차분)                  : 2017. 02.

○ 공사완료(1차분)                          : 2017. 02. ~ 10.

○ 공사완료(2차분)                          : 2018. 02. ~ 06.

○ 공사완료(3차분)                          : 2019. 02. ~ 04.

○ 재해위험저수지 지정 해제                 : 2019. 12.

위 치 도

가정소하천 정비사업

	【 사업개요('16.11.～’19.11) 】
• 위 치 : 곡성군 고달면 두가리 일원 • 사 업 량 : 하천정비 L=0.97km, 교량 4개소, 구조물 1개소 등 • 사 업 비 : 2,900백만원(국비 1,450, 군비 1,450) • 시공회사 : ㈜종산건설

□ 필 요 성

○ 섬진강에 유입되는 소하천으로 하천이 마을을 관류하고 마을 진입로로 이용함에 따라 통수단면 부족현상 및 기 설치된 교량 등 구조물이 현 하폭에 비해 현저히 좁게 설치됨에 따라 침수 피해 발생

□ 2015년도 사업현황

○ 사 업 량 : 실시설계용역 1식

○ 사 업 비 : 400백만원(국비50%, 군비50%)

○ 사업기간 : 2015. 10. ∼ 2016. 10.

□ 2016년도 사업현황

○ 사 업 량 : 하천정비 L=0.12km, 용지보상 1식

○ 사 업 비 : 290백만원(국비50%, 군비50%)

○ 사업기간 : 2016. 11. ∼ 2017. 05.

□ 2017년도 추진현황

○ 사 업 량 : 용지보상 1식

○ 사 업 비 : 455백만원(국비50%, 군비50%)

○ 사업기간 : 2017. 01. ∼ 08.

□ 2018년도 추진현황

○ 사 업 량 : 하천정비 L= 0.8km, 교량 3개소, 구조물 1개소 등

○ 사 업 비 : 1,886백만원(국비 50%, 군비 50%)

○ 사업기간 : 2018. 01. ~ 2020. 01.

위 치 도

대곡2소하천 정비사업

	【 사업개요('16.11.～’19.11) 】
• 위 치 : 곡성군 목사동면 대곡리 일원 • 사 업 량 : 하천정비 L=1.43km, 교량 1개소, 구조물 7개소 등 • 사 업 비 : 2,900백만원(국비 1,450, 군비 1,450) • 시공회사 : ㈜녹산건설

□ 필 요 성

○ 하구에 설치된 보성강 역지수문 차단 시 침수피해가 우려되며, 상류구간은 좌우지반이 낮아 월류하며, 주택가 관류지점은 하천구간을 마을진입로로 이용하고 있어 통수단면 부족 현상 발생

□ 2016년도 사업현황

○ 사 업 량 : 실시설계용역 1식, 용지보상

○ 사 업 비 : 290백만원(국비50%, 군비50%)

○ 사업기간 : 2015. 10. ∼ 2016. 06.

□ 2017년도 추진현황

○ 사 업 량 : 용지보상 1식, 하천정비 L=0.12km, 취입보 2개소

○ 사 업 비 : 382백만원(국비50%, 군비50%)

○ 사업기간 : 2017. 01. ∼ 08.

□ 2018년도 추진현황

○ 사 업 량 : 용지보상 1식, 하천정비 L=  0.77km, 구조물 5개소

○ 사 업 비 : 1,264백만원(국비50%, 군비50%)

○ 사업기간 : 2018. 01 ~ 12.

위 치 도

신월1소하천 정비사업

	【 사업개요('18.01.～’20.12) 】
• 위 치 : 곡성군 곡성읍 신월리 일원 • 사 업 량 : 하천정비 L=1.44km, 교량 1개소, 구조물 9개소 등 • 사 업 비 : 2,900백만원(국비 1,450, 군비 1,450) • 시공회사 : 실시설계 중

□ 필 요 성

○ 곡성천에 유입되는 소하천으로 하류구간은 주거밀집 지역을 관류하는 하천으로 중상류지역은 유로를 따라 좁고 길게 계단식의 경작지가 형성

○ 주거밀집지역의 경우 마을 진입로로 이용함에 따라 통수단면 부족현상 및 기 설치된 교량 등 구조물이 현 하폭에 비해 현저히 좁게 설치됨에 따라 침수 피해 발생

□ 2018년도 추진현황

○ 사 업 량 : 실시설계 1식, 용지보상 1식

○ 사 업 비 : 133백만원(국비 50%, 군비50%)

○ 사업기간 : 2018. 01. ~ 2018. 12.

위 치 도

하천정비

L=1.44km

죽림소하천 정비사업

	【 사업개요('18.01.～’20.12) 】
• 위 치 : 곡성군 옥과면 죽림리 일원 • 사 업 량 : 하천정비 L=1.91km, 교량 7개소, 구조물 9개소 등 • 사 업 비 : 2,900백만원(국비50%, 군비50%) • 시공회사 : 실시설계 중

□ 필 요 성

○ 옥과천에 유입되는 소하천으로 하류구간은 주거밀집 지역을 관류하는 하천으로 중상류지역은 유로를 따라 좁고 길게 계단식의 경작지가 형성되어 있음.

○ 주거밀집지역인 하류부는 마을 진입도로를 이용함에 있어 통수단면 부족현상 및 기 설치된 교량 등 구조물이 현 하폭에 비해 현저히 좁게 설치됨에 따라 침수 피해 발생함.

□ 2018년도 추진현황

○ 사 업 량 : 실시설계 1식, 용지보상 1식

○ 사 업 비 : 320백만원(국비 50%, 군비 50%)

○ 사업기간 : 2018. 01 ~ 2020. 12.

하천정비

L=1.44km

위 치 도

하천정비

L=1.91km