하수관거 공사추진 현황

□ 사 업 명 : 곡성군 하수도정비기본계획(변경) 용역

- 사업기간 : ’20. 3. ~ ’22. 3.

- 사 업 비 : 1,300백만원

- 규    모 : 공공(마을)처리시설, 하수관로, 신규대상지 편입 등

- 주요내용 : 하수도기본계획에 소규모 마을을 편입하여 국비사업 지원 대상지 확보

□ 사 업 명 : 하수관거 정비사업

- 사업기간 : ’20. 2.  ~ ’22. 01.

- 추진계획 :

○ 곡성·옥과지구 하수관거 정비사업(2차) 발주 : ’20. 2. / 준공 : ’20. 12.

○ 곡성군 2단계 노후하수관로 정비사업

- 기본 및 실시설계 용역 : ’19. 12. ~ ‘20. 7.

- 공사 총괄 발주 및 착공(1차) : ’20. 8. / 준공 : ‘20. 12.

○ 곡성군 노후하수관로 정밀조사 용역

- 조사 용역 : ’20. 1. ~ ‘20. 6.(향후 국고신청 자료로 활용)

□  사 업 명 : 마을하수처리장 정비사업

- 대상지구 : 총 51개소 신설 처리장 (’19년까지 46개소 신설 처리장 완료)

- 사업추진 : 11개소(처리장 신설 1개소, 개량 및 연계처리 10개소)

잔여 처리장 연차별 추진(오곡 침곡·구성, 삼기 청계, 석곡 연동)

- 추진계획 :

○ 죽정·목동지구 공사(2차) 발주 : ‘20. 1. / 준공 : ’20.12.

○ 삼오,산정지구 공사(3차) 발주 : ’20. 3. / 준공(총괄) : ’20. 9.

○ 용사,평리,두가지구 공사(2차) 발주 : ’20. 1. / 준공 : ’20. 6.

○ 원등,괴소,운교지구

- 기본 및 실시설계용역 발주 : ’20. 1. ~ ’20. 9.

- 공사 총괄 발주 및 착공(1차) : ’20. 10. / 준공 : ‘20. 12.

○ 고달 상백마을 하수도 설치사업 발주 : ’20. 2. / 준공 : ‘20. 9.

□ 사 업 명 : 하수처리구역 내 정화조 폐쇄사업

- 사업기간 : ’19. 11. ~ ’20. 9.

- 사 업 비 : 1,050백만원

- 사업대상 : 곡성읍, 삼기면, 죽곡면, 옥과면

- 주요내용 : 가옥 내 정화조 폐쇄 349세대

○ 사 업 명 : 소규모 마을 하수도 설치사업

- 사업기간 : ’19. 12. ~ ’20. 9.

- 사 업 비 : 2.660백만원

- 대 상 지 : 고달면 수월, 오산면 관음사

- 주요내용 : 마을하수처리시설 2개소(각 8톤/일)